『2015 KIU 창의·융합페스티벌』

부스공사 및 인쇄물제작 시방서

2015. 11.

제 1 장  총   칙

1. 공사개요

제 2 장 부스 및 부대공사

1. 장치공사 내역

2. 장치공사 일반사항

3. 전기공사 및 랜공사 내역

4. 전기배선공사 유의사항

제 3 장 현수막 및 인쇄물제작

1. 현수막제작 내역

2. 현수막제작 유의사항

3. 인쇄물제작 내역

4. 인쇄물제작 유의사항

제 4 장 임대비품 및 기타사항

1. 임대비품 내역 및 기타내역

2. 임대비품 및 기타 유의사항

제 1 장  총  칙

1. 공사개요

1. 공 사 명 :『2015 KIU창의·융합페스티벌』

2. 장    소 : 경일대학교 종합체육관

3. 행사일시 : 2015. 12. 3(목) 11:00~17:00

4. 장치공사 일정

가) 공사기간 : 2015. 12. 02  ~ 12. 4/ 3일간(시공 및 철거)

나) 공사(설치)완료일 : 2015. 12. 2(20:00) 까지

다) 철거완료일 : 2015. 12. 4(18:00)까지

제 2 장  부스 및 부대공사

1. 장치공사 내역

품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
1) 기본부스	3×3×3.2m	32	부스
2) 벽체형부스	1×2.5m	42	부스	비공학, 기초설계부스
3) 운영부스	3×0.5×2.5m	1	부스	안내데스크
4) 현황판	3.0×2.5m	1	ea
5) 이벤트 존 부스	6.5×2.5m	1	ea	아크릴 벽체 및 조명매입
6) 채용알림판	5.0×2.5m	1	ea
7) 무대조성	7×3.5×4.0m	1	식
8) 바닥공사	380평	1	식	파인텍스

품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
9) 전기공사	콘센트	70	ea
	spot	102	ea
	arm spot	64	ea
10)랜공사		1	식	유선 또는 무선

2. 장치공사 일반사항

1) 설계의 해석

본 공사는 도면과 시방서에 의하여 설계자의 지시에 따라 시공하되 불분명한 개소가 있을 시는 설계자의 해석에 따른다.

2) 시    공

가. 본 공사는 현장조립에 앞서 공장에서 완전 제작한 후 운반하여 현장 조립하여야 한다.

나. 시공은 협의한 배치도대로 시공하여야 하며, 부스마다 상호간판을 시공하여야 한다.

3) 재료 및 색조

설계자가 지시하는 대로 재료, 색조대로 시공하여야 하며, 완성 후 현장확인을 득한 후 담당자에 납품, 시공 확인을 받아야 한다.

4) 설계변경

현장공사에 있어 필요에 따라 재료의 치수, 공법, 위치 조정, 코너부스 상호간판 추가 등 경미한 변경으로 인한 공사금액 및 공사기간은 증감하지 않는다. 단, 수량이 감소하는 경우에는 공사금액에 반영하여 정산한다.

5) 추가사항 발생

현장공사중 발생하는 추가사항(전기, 시설물 보강, 기타 발주건)에 대해서는 주최자의 승인후 시공을 하여야 하며, 승인없이 시공한부분에 대해서는 추후 정산시 반영하지 않는다. 또한 추가물량 정산시에는 계약서 및 시방서의 단가를 기준으로 정산한다.

6) 일반재료

본 공사에 사용되는 모든 재료는 도면에 표기된 재료로서 시공하되 K.S.규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

7) 견본품

설계도면에 명시된 모든 칼라, 문안 원고 등은 사전 담당자의 승인을 받은 후에 사용한다.

8) 수    속

가. 공사에 필요한 수속은 시공자 책임 하에 완료토록 한다.

나. 시공시 필요한 수속절차 및 소요비용은 시공자 부담으로 한다.

9) 공사장 관리

노무자, 기타 인원의 출입감시, 풍기 및 위생단속을 철저히 한다.

10) 전시장치물의 사후처리

모든 공사에 투입되는 전시장치 자재는 전시회 기간이 종료된 후 지정된 기간 내 신속히 철거한다.

3. 전기공사 및 랜공사 내역

1) 조명(스팟)은 판넬 상단에 설치한다.

2) 암스팟은 부스 간판 상단에 설치한다

2) 콘센트는 총 70개 설치하며 부스별 1개 및 기타 필요한 요소에 설치하며 1개당 2구 콘센트로 설치한다.

3) 랜공사는 학교에서 제공해주는 IP를 활용하여 유선 및 무선설비를 설치한다.

4. 전기배선공사 유의사항

1) 전기선은 K.S. 규격품의 제품을 사용하여야 한다.

2) 시공은 전기 기술자격 소지자로 하여금 배선계획을 세워 시공토록 하여야 하며 본 학교 전기시설 담당자와의 협의와 승인을 얻어야한다.

3) 특히 안전사고가 없도록 접속부분은 튼튼하게 비틀어 매고 충분히 절연 테이프를 감는 등 완전한 시공을 하여 전기안전사고에 유의토록 한다.

제 3 장 현수막 및 인쇄물제작

1. 현수막제작 내역

품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
1) 부스현수막	2950×800mm	32	ea
2) 가림막현수막		1	식
3) 패널족자	900×1300mm	200	ea
4) 체육관입구현수막	12000×1500mm	1	ea
5) 교내홍보현수막	7000×700mm	5	ea
6) X배너	600×1800mm	4	ea

2. 현수막제작 유의사항

1) 모든 현수막 시안은 칼라, 문안 원고 등은 사전 담당자의 승인을 받은 후에 제작하여야한다.

2) 부스현수막의 경우 부스와 어울리게 시공하며 견고하게 시공되어야 하며, 가림막 현수막은 행사장 곳곳의 빈공간을 채울 수 있도록 현장상황에 맞게 제작되어야 한다.

3) 패널족자는 부스에 고정될 수 있도록 고리를 매입한 형태로 제작되어야 한다.

4) 외부현수막의 경우 바람과 외부환경에 손상되지 않도록 견고하게 시공되어야 한다.

3. 인쇄물제작 내역

품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
1) 포스터	520×730mm	300	부
2) 초청장(봉투포함)	195×110mm	1000	부
3)작품집	210×300mm	350	부	약 200page
4) 명찰디자인		1	식	디자인작업
5) 폼보드	500×300mm	6	ea	시상식용
6) 씨링		1000	ea	스템프용
7) 스템프지		500	ea
8) 씨링 부착용 보드	900×600mm	2	ea	이젤포함

4. 인쇄물제작 유의사항

1) 모든 인쇄물 시안은 칼라, 문안 원고 등은 사전 담당자의 승인을 받은 후에        제작하여야한다.

2) 초청장의 경우 발송작업 까지를 포함한다.(우편발송료 포함)

제 4 장 임대비품 및 기타사항

1. 임대비품 내역 및 기타내역

품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
1) 1800테이블	1800×600mm	50	ea
2) 1m 인포테이블	950×500×750mm	50	ea
3) 온풍기		6	ea
4) 원탁테이블set	의자 각 4개포함	9	set
5) 음향시스템		1	식	개회식용
6) 스크린		1	ea	빔프로젝트용
7) 의자		150	ea
8) 모니터	32“	6	ea
9 )기타용역	미니카페운영	1	식	500잔기준
	사회자	1	명
	도우미	2	명	의전용
	테이프커팅 일체	1	식	특수효과포함
	진행인력	2	명

2. 임대비품 및 기타 유의사항

1) 모든 임대비품은 양호한 상태의 비품을 제공하여야하며 청소상태가 불량한      경우 현장에서 정비하여야 한다.

2) 온풍기는 전기 및 화기제품의 안전규격에 적합한 제품을 제공하여야 하며 지      속적으로 화재와 안전에 대한 주의를 기울여야 한다.

3) 음향시스템은 행사장 규모를 고려한 출력제품이 설치되어야 하며 행사진행중     전담 조작인력이 항시 배치되어야 한다.

4) 미니카페 운영은 전담인력이 배치되고 500잔이상 제공될 수 있는 제반 시설      및 물품들을 포함하여야 한다.

3. 행사장 배치도